Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 июля 2010 г. N 2850 "О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы" (с изменениями и дополнениями)
Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 26 июля 2010 г. N 2850
"О муниципальной программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Череповец на 2014 - 2022 годы" (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города, курирующего городское хозяйство.

Мэр города	О.А. Кувшинников	

Утверждена
постановлением мэрии города
от 26.07.2010 N 2850

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы

Ответственный исполнитель:
департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии

Дата составления проекта муниципальной программы: июнь 2010 года

Непосредственный исполнитель	Телефон, электронный адрес	
Главный специалист отдела энергетики департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии	55-47-56,
djkh@cherepovetscity.ru	

Паспорт
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы
(далее - муниципальная программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	
Соисполнители муниципальной программы	Управление по делам культуры мэрии
Управление образования мэрии	
Участники муниципальной программы	- Муниципальные учреждения и предприятия города, органы мэрии города,
- Коммунальные предприятия города	
Подпрограммы муниципальной программы	1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве	
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	-	
Цели муниципальной программы	- Переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде	
Задачи муниципальной программы	- Сокращение потребления энергоресурсов;
- сокращение потерь энергоресурсов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергоресурсы с использованием приборов учета;
- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергоресурсов;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;
- создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче	
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (пункт 1 приложения 1 к муниципальной программе)	
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2022 годы	
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы	Всего 2014 - 2022 годы - 40 3401.2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 51 189,7 тыс. руб.
2015 - 37 541,4 тыс. руб.
2016 - 44 134,8 тыс. руб.
2017 - 37 268,0 тыс. руб.
2018 - 50 793,7 тыс. руб.
2019 - 46 428.4 тыс. руб.
2020 - 46 766,6 тыс. руб.
2021 - 51 313,8 тыс. руб.
2022 - 37 964,8 тыс. руб.	
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета	Всего 2014 - 2022 годы - 7 293.8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 892,7 тыс. руб.
2015 - 892,7 тыс. руб.
2016 - 3 626,7 тыс. руб.
2017 - 1 000,0 тыс. руб.
2018 - 298,9 тыс. руб.
2019 - 283.9 тыс. руб.
2020 - 298,9 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.
2022 - 0,0 тыс. руб.	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- Наличие в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов (100%).
- Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
- Переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса.
- Обеспечение необходимых условий для достижения удельного потребления энергоресурсов и воды в расчете на одного жителя к 2022 году:
- воды - 83,79 куб. м в год на одного жителя;
- электрической энергии - 1878,40 кВт/ч в год на одного проживающего;
- тепловой энергии - 7,40 Гкал в год на человека.	

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов на территории города Череповца, является одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, водоснабжение и водоотведение, цен на топливо, ресурсы, инфляция приводят к повышению расходов на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. Данные негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории города и актуальность проведения единой целенаправленной политики энергосбережения.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста.
Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются:
- бюджетный сектор;
- жилищный фонд;
- системы коммунальной инфраструктуры.
Динамика потребления энергоресурсов и воды представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объемы потребления по годам	
Отчетный период	тепловая энергия, тыс. Гкал	электрическая энергия, тыс. кВтч	водоснабжение, тыс. куб. м	
2009	2 475,66	594 660,00	44 315,96	
2010	2 701,01	601 074,57	42 201,50	
2011	2 519,32	586 292,00	39 010,80	
2012	2 596,42	611 435,00	37 233,70	
2013	2 460,30	637 192,46	40 303,15	
2014	2 295,94	615 939,04	33 953,70	
2015	2 311,94	606 244,38	36 162,10	
2016	2 354,84	607 829,49	35 350,70	
2017	2 366,33	606 310,13	33 992,84	
2018	2 368,39	602 786,95	33 468,81	

Как следует из таблицы, объемы потребления воды устойчиво снижаются, начиная с 2015 года. Объемы потребления тепловой и электрической энергии не стабильны и определяются преимущественно климатическими факторами.
Особый интерес в вопросе энергосбережения вызывают объекты бюджетной сферы, так как данные учреждения потребляют достаточно большое количество ресурсов, в то же время их потенциал энергосбережения весьма высокий.
Оснащенность приборами учета учреждений и организаций, финансируемых за счет средств городского бюджета, по состоянию на 01.01.2013 составила 100%.
Обязанность, возложенная на бюджетные учреждения - снижение в сопоставимых условиях потребляемых ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленных ресурсов в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% - за 2010 - 2012 год не выполнена.
Основными проблемами энергосбережения в зданиях бюджетной сферы города являются изношенность внутридомовых инженерных сетей, значительные тепловые потери через ограждающие конструкции зданий, а также отсутствие энергосберегающего оборудования, тогда как во внедрении прогрессивных энергоэффективных технологий скрыт основной резерв энергосбережения.
Анализ существующего положения в области энергосбережения в городе показал, что мероприятия по энергосбережению в зданиях бюджетной сферы практически не реализуются. Причинами являются низкий объем финансирования и отсутствие четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.
При дальнейшем сохранении таких тенденций неизбежно увеличение потребления коммунальных ресурсов бюджетными организациями из-за увеличения потерь ресурсов вследствие физического износа инженерных сетей и оборудования, что приведет к значительному увеличению финансовых средств, расходуемых на оплату коммунальных ресурсов и работ по поддержанию объектов инженерной инфраструктуры в технически исправном состоянии.
В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями с участием муниципального образования предлагается реализация мероприятий муниципальной программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования".
Жилищный фонд города на 01.01.2013 составлял 7,377 млн. квадратных метра, население города по состоянию на 01.01.2013 - 315,7 тыс., в эксплуатации числилось 1689 многоквартирных и 1308 индивидуальных жилых домов.
На сегодняшний день данный сектор остается самым крупным потребителем энергоресурсов. На начало 2019 года в эксплуатации находятся 1795 многоквартирных и более 1650 индивидуальных жилых домов.
Годовое потребление энергетических ресурсов жилищным фондом города составляет свыше 60% от общего отпуска энергоресурсов энергоснабжающими предприятиями.
Эффективное управление многоквартирными домами невозможно без использования энергосберегающих технологий - применение современных теплоизоляционных материалов, установка приборов учета энергоресурсов, замена изношенных трубопроводов, установка энергосберегающего оборудования.
При использовании данных технологий возможно не только улучшение качественных характеристик жилых домов, комфортности проживания, но и значительное сокращение издержек по содержанию и ремонту зданий, увеличение межремонтных сроков, экономия коммунальных ресурсов, что приведет в конечном итоге к снижению платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Для решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде города предлагается реализация мероприятий муниципальной программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде".
В состав организаций коммунального комплекса города входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжением и водоотведением, утилизацией твердых бытовых отходов.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
Снижение неэффективных затрат коммунального комплекса в настоящее время является приоритетным не только в вопросах ценообразования и снижения расходов на услуги коммунального комплекса, но и в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
По состоянию на 01.01.2013 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 45%.
Основу систем жизнеобеспечения любого современного города составляют многочисленные трубопроводы - водо-, газо- и теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации. Эти сети создавались десятилетиями, и их протяженность измеряется многими сотнями километров. В настоящее время состояние коммунальных сетей представляет собой проблему, серьезность которой нельзя недооценивать.
В Череповце насчитывается 383,579 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 264,9 из них уже отслужили свой нормативный срок, общий износ тепловых сетей составляет 69,06%, износ оборудования котельных - 35%. Вместе с тем, суммарные фактические потери тепловой энергии составляют 16,7% от отпущенной энергии всем потребителям.
Износ водопроводных и канализационных сетей составляет 71,5% и 69,3% соответственно, при этом 368,35 км водопроводных и 274,42 км канализационных сетей отслужили установленные нормативные сроки. Потери за 2018 год составили 11% от общего отпуска воды всем потребителям.
Электрических сетей в городе более 1648,1 км, из них 966,1 км отслужили нормативный срок. Потери электрической энергии за 2018 год составили 4,4%.
Для успешного решения задачи повышения эффективности потребления энергоресурсов организациями коммунального комплекса предлагается реализация мероприятий муниципальной программы, представленных в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве".
Решение проблем энергосбережения топливно-энергетических ресурсов на территории города возможно только в комплексе и требует взаимодействия между органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления и организациями жилищно-коммунального комплекса, направленного на осуществление энергосберегающих мероприятий. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач муниципальной программы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и с наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить возрастающие расходы на коммунальные платежи у населения, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из требований Федерального законодательства, а также исходя из стратегии развития города - повышение энергоэффективности является одним из приоритетных направлений развития города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целями муниципальной программы являются:
- переход города на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;
- создание условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде.
Задачи муниципальной программы:
- сокращение потребления энергоресурсов;
- сокращение потерь энергоресурсов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета;
- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении;
- создание резервных энергетических мощностей за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их передаче.
В муниципальной программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий (приложение 1 к муниципальной программе).
Целевые показатели муниципальной программы определены в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации, по следующим группам:
- общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
- целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Успешная реализация муниципальной программы позволит достичь:
- наличия в организациях с участием муниципального образования энергетических паспортов (100%);
- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы, жилищного фонда с организациями коммунального комплекса;
- обеспечения необходимых условий для достижения удельного потребления энергоресурсов и воды в расчете на одного жителя к 2022 году (воды - 83,79 куб. м в год на человека; электрической энергии - 1878,40 кВт/ч в год на одного проживающего; тепловой энергии - 7,40 Гкал в год на человека).
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.
Реализация муниципальной программы предусмотрена на период с 2014 по 2022 годы.

Обобщенная характеристика, обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы реализуемых подпрограмм

С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей муниципальной программы, а также задач муниципальной программы выделены следующие подпрограммы:
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования.
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования является снижение объемов потребляемых ими топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
Основной целью реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде является создание условий для экономии энергоресурсов и воды и, как следствие, оптимизация расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых в жилищном фонде.
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве направлены на повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителям.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Информация об участии общественных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие: муниципальные учреждения, предприятия города, органы мэрии города и коммунальные предприятия города.
Участие общественных, научных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации Программы не предусмотрено.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий муниципальной программы, относятся инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, собственные средства предприятий и организаций, заинтересованных в осуществлении программ по энергосбережению, кредиты банков и другие поступления.

Информация по ресурсному обеспечению за счет "собственных" средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и другим источникам финансирования

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета и других источников финансирования представлена в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить надежность и стабильность работы жилищно-коммунальной инфраструктуры, будет способствовать экономическому развитию города. В результате выполнения мероприятий данной муниципальной программы повысится эффективность использования энергоресурсов, снизятся потери тепла и воды, уменьшатся затраты на эксплуатацию коммунального оборудования.
Модернизация и замена оборудования на котельных и инженерных сетях, позволят ликвидировать критический уровень износа сетей и оборудования, уменьшить риск аварий техногенного характера. В результате реализации мероприятий данной муниципальной программы будут улучшаться комфортность и безопасность условий проживания граждан.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации муниципальной программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
В целях минимизации рисков (недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы; неразвитость рынка энергосервисных услуг; несвоевременное выполнение работ; поставка некачественного оборудования) в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы;
- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждена приказом Минэнерго России и представлена в таблице 2.

Таблица 2

Методика
расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Определение (характеристика)	Алгоритм расчета	Периодичность сбора данных	Источник данных	
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:	
1.1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ()	%	Показывает долю объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования	

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт-ч;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт-ч.	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	сведения МУП "Электросеть"	
1.2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ()	%	Показывает долю объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования	, где:

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал.	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	сведения ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	
1.3.	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ()	%	Показывает долю объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования	, где:

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс.куб.м.	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	сведения МУП "Водоканал"	
1.4.	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ()	%	Показывает долю объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования	, где:

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс.куб.м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс.куб.м	-	-	
1.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования ()	%	Показывает долю объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, на территории муниципального образования	, где:

 - объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс.куб.м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс.куб.м	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	сведения ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	
1.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования ()	%	Показывает долю объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, на территории муниципального образования	, где:

 - объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т.у.т.;
 - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т.у.т.
	-	сведения ресурсоснабжающих организаций	
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе	
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/
кв. м	Показывает удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	, где:

 - объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт-ч;
 - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м	годовая периодичность сбора данных; за период	сведения МУП "Электросеть", муниципальных учреждений	
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/
кв. м	Показывает удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	, где:

 - объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;
 - площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв.м	годовая периодичность сбора данных; за период	сведения ООО "Газпром теплоэнерго Вологда", муниципальных учреждений	
2.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека)	куб. м./
чел.	Показывает удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	, где:

 - объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м;
 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.	годовая периодичность сбора данных; за период	сведения МУП "Водоканал", муниципальных учреждений	
2.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м./
чел.	Показывает удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	, где:

 - объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м;
 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.	-	отсутствует	
2.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека)	куб. м/
чел.	Показывает удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	, где:

 - объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб.м;
 - количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.	годовая периодичность сбора данных; за период	сведения ООО "Газпром межрегионгаз Вологда", муниципальных учреждений	
2.6.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы 	%	Показывает отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к объему бюджетных ассигнований	, где:

 - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс.руб.;
 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс.руб.	-	сведения финансового управления мэрии города	
2.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	Показывает количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	Абсолютное значение количества энергосервисных договоров, фактически заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения МУП, УО, УДК, КФКиС	
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	
3.1.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/
кв. м	Показывает удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах	, где:

 - объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал;
 - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м.	годовая периодичность сбора данных; за период	форма 1-жилфонд; ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	
3.2.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах  (в расчете на 1 жителя)	куб. м./
чел.	Показывает удельный расход холодной воды в многоквартирных домах	, где:

 - объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб.м;
 - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.	годовая периодичность сбора данных; за период	МУП "Водоканал"	
3.3.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах  (в расчете на 1 жителя)	куб. м./
чел.	Показывает удельный расход горячей воды в многоквартирных домах	, где:

 - объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб.м;
 - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел.	-	отсутствует	
3.4.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах  (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/
кв. м.	Показывает удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах	, где:

 - объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт-ч;
 - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.	годовая периодичность сбора данных; за период	форма 1-жилфонд; МУП "Электросеть"	
3.5.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления  (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/
кв. м	Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления	, где:

 - объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс.куб.м;
- площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.	годовая периодичность сбора данных; за период	ООО "Газпром межрегионгаз Вологда"	
3.6.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/
чел.	Показывает удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения	, где:

 - объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс.куб.м;
 - количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.	годовая периодичность сбора данных; показатель на дату	ООО "Газпром межрегионгаз Вологда", ДЖКХ	
3.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ()	т.у.т./
кв. м	Показывает удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	, где:

 - суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т.у.т.;
 - площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.м.	годовая периодичность сбора данных; за период	форма 1-жилфонд; ресурсоснабжающие организации	
3.8.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах ()	%	Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах	 , где:

 - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета воды, ед.;
 - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед.	годовая периодичность сбора данных; за период	форма 1-жилфонд; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами	
3.9.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах
()	%	Показывает степень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах	. где:

 - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, ед.;
 - количество жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования, ед.	годовая периодичность сбора данных; за период	форма 1-жилфонд; сведения организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами	
3.10.	Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду	шт.	Показывает количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в муниципальных жилых помещениях	Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, фактически установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	ДЖКХ мэрии	
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	
4.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях ()	т.у.т./
млн. Гкал	Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	, где:

 - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, т.у.т.;
 - объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, млн.Гкал.	-	-	
4.2.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
()	т.у.т./
Гкал	Показывает удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	, где:

 - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т.у.т.;
 - объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал.	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	
4.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
()	тыс. кВтч/
тыс. куб. м	Показывает удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	, где:

 - объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс.кВт-ч;
 - объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб.м.	годовая периодичность сбора данных; за период	ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	
4.4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
()	%	Показывает долю потерь тепловой энергии при ее передаче	

 - объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал;
 - общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал.	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	
4.5.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
()	%	Показывает долю потерь воды при ее передаче	,где:

 - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб.м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб.м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб.м.	квартальная периодичность сбора данных; за отчетный период	МУП "Водоканал"	
4.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения  (на 1 куб. метр)	тыс. кВтч/
тыс. куб. м		, где

 - объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс.кВт-ч;
 - объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс.куб.м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс.куб.м;
 - общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс.куб.м.	годовая периодичность сбора данных; за период	МУП "Водоканал"	
4.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения  (на 1 куб.метр)	тыс. кВтч/
куб. м	Показывает удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения	, где:

 - объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс.кВт-ч;
 - общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб.м.	годовая периодичность сбора данных; за период	МУП "Водоканал"	
4.8.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения  (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/ кв. м	Показывает удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения	, где:

 - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт-ч;
 - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв.м.	годовая периодичность сбора данных; за период	МУП "Электросвет", форма N 1-КХ	
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"	
5.1.	количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;	шт.	Показывает количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту	Абсолютное значение количества индивидуальных приборов учета, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения отдела транспорта мэрии	
5.2.	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;	шт.	Показывает количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Абсолютное значение количества транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения отдела транспорта мэрии	
5.3.	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	шт.	Показывает количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	Абсолютное значение количества транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения отдела транспорта мэрии	
5.4.	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	шт.	Показывает количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием	Абсолютное значение количества транспортных средств, с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения отдела транспорта мэрии	
5.5.	количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;	шт.	Показывает количество транспортных средств, используемых ОМС, МУ, МУП, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Абсолютное значение количества транспортных средств, транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения МУП	
5.6.	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.	шт.	Показывает количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых ОМС, МУ и МУП	Абсолютное значение количества транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отчетном периоде.	полугодовая периодичность сбора данных; за период	Сведения отдела транспорта мэрии	

Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения целевых показателей реализации муниципальной программы.
Совокупная эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

.

где:
 - совокупная эффективность реализации муниципальной программы;
 - степень достижения i-того целевого показателя муниципальной программы, %,
 - количество целевых показателей муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если значение показателя Пэф  95 %, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
- если значение показателя Пэф < 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.
Степень достижения i-того целевого показателя муниципальной программы (Пi) рассчитывается путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

,

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:
 - плановое значение i-того целевого показателя муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения);
 - фактическое значение i-того целевого показателя муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения).
Исключение составляют следующие показатели:
- Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования ();
- Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы ;
- Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях ().
При достижении показателя значения 0, выполнение показателя составляет 100%.
Достижение плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Степень достижения запланированного уровня затрат (ЭБ) определяется по формуле:

,

где:
 - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы, тыс. руб;
 - лимиты бюджетных обязательств, тыс. руб.
Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя  от 95% и выше.
Социально-экономическая эффективность мер, предусмотренных муниципальной программой, заключается в снижении затрат потребителей по оплате коммунальных услуг вследствие достижения предусмотренных объемов экономии энергоресурсов.
Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности оборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	
Соисполнители Подпрограммы 1	Управление по делам культуры мэрии
Управление образования мэрии	
Участники Подпрограммы 1	Муниципальные учреждения и предприятия города, органы мэрии города	
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1	-	
Цель Подпрограммы 1	Снижение объемов потребляемых организациями с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями	
Задачи Подпрограммы 1	- Переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
- проведение обязательного энергетического обследования в организациях с участием муниципального образования;
- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;
- реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования	
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе (пункт 2 приложения 1 к муниципальной программе)	
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	2014 - 2022 годы	
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1	Всего 2014 - 2022 годы - 39 799,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 14 955,5 тыс. руб.
2015 - 2 119,7 тыс. руб.
2016 - 4 772,2 тыс. руб.
2017 - 3 791,9 тыс. руб.
2018 - 2 552,4 тыс. руб.
2019 - 6 019,6 тыс. руб.
2020 - 2 157,3 тыс. руб.
2021 - 2 027,6 тыс. руб.
2022 - 1 402,8 тыс. руб.	
Объемы бюджетных ассигнований за счет "собственных" средств городского бюджета Подпрограммы 1	Всего 2014 - 2022 годы - 3 440,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 - 0,0 тыс. руб.
2015 - 0,0 тыс. руб.
2016 - 2 940,0 тыс. руб.
2017 - 500,0 тыс. руб.
2018 - 0,0 тыс. руб.
2019 - 0,0 тыс. руб.
2020 - 0,0 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.
2022 - 0,0 тыс. руб.	
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	Наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов - 100%.
Снижение объемов потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды.
100% оснащение приборами учета муниципальных зданий	

Характеристика текущего состояния энергопотребления в организациях с участием муниципального образования, основные проблемы и прогноз развития сферы

В бюджетной сфере и сфере оказания услуг города действуют более 200 муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, муниципальных предприятий, а также органы мэрии, наделенные правами юридического лица.
В муниципальных зданиях города существует значительный потенциал энергосбережения.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования являются:
- высокий уровень морально-технического износа муниципальных зданий и его сохраняющийся рост;
- низкий объем финансирования энергосберегающих мероприятий;
- отсутствие рынка энергосервисных услуг;
- низкий уровень компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов и отсутствие средств на их обучение.
При сохранении текущего положения дел рост расходов муниципальных учреждений и предприятий за коммунальные ресурсы неизбежен. Выполнение требований действующего законодательства в части сокращения бюджетными учреждениями потребления энергоресурсов на 15% от объема фактически потребленных в 2009 году также вызывает определенные сомнения.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроков и этапов реализации Подпрограммы 1

Главной целью Подпрограммы 1 является снижение объемов потребляемых организациями с участием муниципального образования топливно-энергетических ресурсов, в том числе бюджетными учреждениями.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов;
- проведение обязательного энергетического обследования в организациях с участием муниципального образования;
- создание эффективной системы контроля за потреблением энергетических ресурсов;
- реализация мероприятий по энергосбережению с применением энергоэффективных технологий и оборудования.
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе планируется достичь за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1, а также программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений и предприятий.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В результате реализации Подпрограммы 1 возможно обеспечить:
- наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов - 100%;
- снижение объемов потребления бюджетными учреждениями энергоресурсов и воды;
- 100% оснащение приборами учета муниципальных зданий.

Характеристика мероприятий Подпрограммы 1

К основным мероприятиям Подпрограммы 1 отнесены мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования.
Технические мероприятия по снижению потребления энергетических ресурсов и воды реализуются в муниципальных зданиях по следующим направлениям:
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления тепловой энергии (оборудование тепловых пунктов индивидуальными автоматизированными пунктами отопления и горячего водоснабжения, утепление крыши, замена оконных блоков и входных дверей, теплоизоляция наружных стен, изоляция трубопроводов системы ГВС и отопления, промывка системы отопления и др.);
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления электрической энергии (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка систем автоматического регулирования освещения, замена уличных светильников на светодиодные);
- энергосберегающие мероприятия, направленные на снижение потребления воды (восстановление рециркуляции в системе ГВС, установка эффективной водоразборной арматуры в сочетании с ремонтом труб).
Организационные и технические мероприятия по энергосбережению, затраты на их реализацию на муниципальных предприятиях представлены в таблице 3, в муниципальных бюджетных учреждениях - в таблице 4.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1, представлен в приложениях 3, 4 к муниципальной программе.

Таблица 3

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на муниципальных предприятиях города

п/п	Предприятие /объект/, наименование мероприятия	Затраты по годам, тыс. руб.	Всего затрат, тыс. руб.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	МУП "Череповецкая автоколонна N 1456"	170,0	180,0	200,0	250,0	250,0	200,0	692,0	450,0	600,0	2 992,0	
1.1.	Замена вентильных кранов на шаровые	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
1.2.	Замена деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты в ПВХ	150,0	180,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	1 530,0	
1.3.	Установка теплоотражающих экранов на участках наружной стены за отопительными приборами	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
1.4.	Замена светильников ДРЛ в РММ на светодиодные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	210,0	
1.5.	Замена входных дверей, утепление тамбуров зданий АБК и диспетчерская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.6.	Замена светильников ЛПО в кабинетах АБК на светодиодные	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	200,0	
1.7.	Внедрение проекта по реконструкции теплового пункта РММ (первый этап)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	
1.8.	Внедрение проекта по автоматизации системы отопления АБК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	0,0	0,0	232,0	
1.9.	Разработка проекта по реконструкции теплового пункта РММ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	
2	МУП города Череповца "Банно-прачечное хозяйство"	448,0	483,0	497,0	729,4	408,5	4 718,9	838,1	763,4	348,6	9 234,9	
2.1.	Замена деревянных окон на окна ПВХ с многокамерными стеклопакетами	11,0	25,0	26,0	32,2	16,8	0,0	119,2	110,0	110,0	450,2	
2.2.	Перекладка устаревших электрических сетей помещений бани	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	
2.3.	Приклеивание к внутренним оконным и дверным прихлопам уплотнительной ленты для снижения тепловых потерь в помещениях бань	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	25,0	
2.4.	Замена дверей	97,0	18,0	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	180,6	
2.5.	Установка душевых установок в моечные отделения	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	
2.6.	Установка регуляторов давления воды в моечные отделения	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
2.7.	Установка частотных преобразователей на системе вентиляции	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	
2.8.	Ремонт фасада здания	220,0	220,0	156,0	83,0	285,8	0,0	164,0	110,0	0,0	1 238,8	
2.9.	Замена ВРУ-3 системы электроснабжения бани	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	
2.10.	Ремонт кровли здания	0,0	160,0	250,0	456,2	0,0	4 083,0	0,0	0,0	0,0	4 949,2	
2.11.	Проведение энергоаудита	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
2.12.	Установка термоизоляции стен парильных отделений	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	53,5	
2.13.	Замена электрооборудования ЩУ и РУ	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	
2.14.	Замена участка трубопровода отопления в женском парильном отделении	0,0	0,0	0,0	14,7	12,3	31,0	40,0	31,0	39,0	168,0	
2.15.	Замена 2-х окон и 2-х дверей в парильных отделениях	0,0	0,0	0,0	28,3	28,0	38,0	38,0	40,0	42,0	214,3	
2.16.	Установка балансировочных кранов на коллекторе подачи системы отопления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0	
2.17.	Замена люминисцентных светильников на энергосберегающие	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	7,4	7,6	29,4	
2.18.	Косметический ремонт в помещении солярия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	
2.19.	Ремонт труб системы отопления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	
2.20.	Замена пластинчатого ТО теплового пункта на системе ГВС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	315,7	62,0	80,0	0,0	457,7	
2.21.	Частичная замена пластин ТО ТП на системе ГВС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
2.22.	Капитальный ремонт печей-каменок в парильных отделениях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0	
2.23.	Ремонт потолка и стен парильных отделений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	41,4	53,0	60,0	200,4	
2.24.	Теплоизоляция стен в парильных отделениях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	
2.25.	Ремонт фасада котельной бани	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0	
2.26.	ремонт автоматических душей в моечных отделениях бани	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	15,8	0,0	31,6	
2.27.	Ремонт потолков в моечном и раздевальном отделениях бань	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,6	0,0	0,0	94,6	
2.28.	ремонт электрического водонагревательного котла	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	25,7	
2.29.	замена ламп ДРЛ в светильниках уличного осведения на светодиодные лампы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	120,0	
2.30.	Замена нагревательной печи в сауне	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	23,0	48,2	
2.31.	Ремонт стен с использованием тепло-гидроизоляционных материалов в помещениях зданий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,0	166,7	0,0	364,7	
3	МУП города Череповца "Специализированная ритуальная служба"	7,0	3,0	13,5	37,5	167,5	167,5	113,5	113,5	124,5	747,5	
3.1.	Утепление входных дверей	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
3.2.	Установка датчиков движения в местах общего пользования с заменой ламп накаливания на галогеновые светильники во всех зданиях	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	
3.3.	Проведение ежегодных инструктажей работников учреждения методам сбережения э/энергии	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	17,5	
3.4.	Установка энергосберегающих ламп	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	
3.5.	Замена уличных светильников во всех зданиях на светодиодные с датчиком освещенности	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	
3.6.	Установка средств наглядной агитации и пропаганды сбережения электроэнергии во всех зданиях	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	20,0	
3.7.	Установка регулирующих вентилей на отопительные приборы в помещениях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	
3.8.	Замена существующих люминесцентных светильников во всех зданиях на светильники с современными энергосберегающими лампами с электронными пуско регулирующими аппаратами (ЭПРА), обеспечивающими зажигание люминесцентных ламп	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	106,0	106,0	108,0	640,0	
4	МУП "Санаторий "Адонис"	3 731,0	77,0	60,0	458,0	92,0	110,0	0,0	450,0	0,0	4 978,0	
4.1.	Замена электрооборудования	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	255,0	
4.2.	Ремонт розлива холодного водоснабжения	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	
4.3.	Капитальный ремонт 3 этажа жилого корпуса с заменой электросетей, сантехники, системы отопления, ГВС и ХВС, канализации	3 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 250,0	
4.4.	Ремонтные работы в рамках подготовки к ОЗП	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	
4.5.	Обучение, повышение квалификации, ответственных за проведение энергосберегающих мероприятий	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	
4.6.	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
4.7.	Замена электрооборудования щитков в 104 каб.	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
4.8.	Замена светильников	0,0	56,0	60,0	0,0	92,0	60,0	0,0	0,0	0,0	268,0	
4.9.	Замена светильников и ламп в номерах на 3 и 4 этаже на светодиодные	0,0	0,0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0	
4.12.	Установка светодиодных светильников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	200,0	0,0	250,0	
4.13.	Автоматизация теплового пункта погодозависимой автоматикой	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	
5	МТПП "Фармация"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.1.	Установка пластиковых окон с тройным остеклением	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.2.	Замена наружных витрин на пластиковые с реконструкцией системы отопления торгового зала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	МУП "Электросвет"	61,0	50,2	74,2	120,5	108,6	0,0	0,0	0,0	0,0	414,5	
6.1.	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	
6.2.	Установка автоматических регуляторов температуры на радиаторы отопления	45,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,6	
6.3.	Утепление кровли	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	
6.4.	Утепление распашных ворот гаражных боксов	0,0	0,0	0,0	99,7	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	161,5	
6.5.	Замена окон на пластиковые	0,0	0,0	74,2	20,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8	
6.6.	Энергоаудит	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	
7	МУП "Электротранс"	236,0	805,5	427,5	446,5	423,2	223,2	513,7	250,7	329,7	3 656,0	
7.1.	Нанесение изоляции на трубопроводы	2,0	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	4,5	
7.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие с установкой новых светильников	17,0	20,0	20,0	20,0	15,0	16,0	17,0	18,0	18,0	161,0	
7.3.	Установка энергосберегающих окон	50,0	60,0	60,0	60,0	20,0	20,0	25,0	25,0	25,0	345,0	
7.4.	Обслуживание автоматики ТЭУ	42,0	42,0	33,0	36,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	303,0	
7.5.	Установка и замена доводчиков на двери	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	25,5	
7.6.	Поверка и замена приборов учета	30,0	20,0	13,0	0,0	38,0	1,0	20,0	1,0	30,0	153,0	
7.7.	Утепление ворот, замена дверей	16,0	4,0	6,0	20,0	4,0	8,0	100,0	10,0	10,0	178,0	
7.8.	Ремонт ТЭУ, сан. оборудования, подготовка к отопительному сезону, замена регистров	8,0	35,0	35,0	38,0	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0	276,0	
7.9.	Переход на светодиодное освещение в трамвае	30,0	285,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	640,0	
7.10.	Ремонт кровли	3,0	200,0	50,0	50,0	70,0	50,0	0,0	0,0	50,0	473,0	
7.11.	Ремонт цоколя ТП-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	
7.12.	Обучение энергетического персонала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	32,0	
7.13.	Гидроизоляция стен зданий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	
7.14.	Ремонт системы отопления 4-ой канавы	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	32,0	0,0	0,0	0,0	130,0	
7.15.	Замена секций водоподогревателя	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	55,0	
7.16.	Переход на статические преобразователи	35,0	77,0	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	
7.17.	Утепление стыка крыши со стеной	0,0	60,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	
7.18.	Утепление по периметру стены депо по 1-му пролету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	300,0	
7.19.	Утепление нового гаража	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	
8	ЧМП "Спецавтотранс"	127,5	521,0	560,0	1 250,0	1 102,6	600,0	0,0	0,0	0,0	4 161,1	
8.1.	Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами	0,0	61,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	
8.2.	Установка узла учета тепловой энергии на здание н. Гаражи	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	
8.3.	Замена освещения производственных зданий на светодиодные светильники	26,6	57,0	60,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	493,6	
8.4.	Утепление гаражных боксов	0,0	0,0	200,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
8.5.	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	
8.6.	Утепление оконных и дверных проемов	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	
8.7.	Установка системы транспортного мониторинга	83,9	297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,9	
8.8.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	
8.9.	Модернизация теплового пункта с заменой кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый с автоматикой	0,0	21,0	0,0	0,0	1 002,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 023,6	
8.10.	Капитальный ремонт теплового пункта	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	
8.11.	Капитальный ремонт электрооборудования в гаражных боксах	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	600,0	
9	МУП "Жемчужина Мологи"	10 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 175,0	
9.1.	Замена окон на пластиковые с многокамерными стеклопакетами	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	
9.2.	Замена наружных дверей на утепленные	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	
9.3.	Замена наружных светильников на энергосберегающие	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	
Итого:	14 955,5	2 119,7	1 832,2	3 291,9	2 552,4	6 019,6	2 157,3	2 027,6	1 402,8	36 359,0	

Таблица 4

Затраты из городского бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях

N
п/п	Наименование учреждения, наименование мероприятия	Затраты по годам, тыс. руб.	Всего затрат, тыс. руб.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	МБУК "ЧерМО"	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
1.1.	Установка автоматизированного теплового узла в здании Художественного музея	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
2	МКУ "ЦБ ОУК"	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
2.1.	Установка автоматизированного теплового узла в здании по адресу Советский пр., 35а	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
3	МБДОУ "Детский сад N 62"	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
3.1.	Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
4	МБДОУ "Детский сад N 72"	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
4.1.	Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
5	МБДОУ "Детский сад N 86"	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
5.1.	Замена оборудования теплового пункта индивидуальным автоматизированным пунктом отопления и горячего водоснабжения	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
6	МБДОУ "Детский сад N 112"	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
6.1.	Замена оборудования теплового пункта на автоматизированный пункт отопления и горячего водоснабжения	0,0	0,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	610,0	
	Итого:	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 440,0	

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"
(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	
Соисполнители Подпрограммы 2	-	
Участники Подпрограммы 2	-	
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2	-	
Цель Подпрограммы 2	Снижение объемов потребляемых населением коммунальных ресурсов	
Задачи Подпрограммы 2	- Переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;
- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;
- стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;
- реализация мероприятий по энергосбережению	
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (пункт 3 приложения 1 к муниципальной программе)	
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	2014 - 2022 годы	
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2	Всего 2014 - 2022 годы - 3 853.8 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2014 - 892,7 тыс. руб.
2015 - 892,7 тыс. руб.
2016 - 686,7 тыс. руб.
2017 - 500,0 тыс. руб.
2018 - 298,9 тыс. руб.
2019 - 283.9 тыс. руб.
2020 - 298,9 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.
2022 - 0,0 тыс. руб	
Объемы бюджетных ассигнований за счет "собственных" средств городского бюджета Подпрограммы 2	Всего 2014 - 2022 годы - 3 853.8 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2014 - 892,7 тыс. руб.
2015 - 892,7 тыс. руб.
2016 - 686,7 тыс. руб.
2017 - 500,0 тыс. руб.
2018 - 298,9 тыс. руб.
2019 - 283.9 тыс. руб.
2020 - 298,9 тыс. руб.
2021 - 0,0 тыс. руб.
2022 - 0,0 тыс. руб	
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2	- 99% оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии помещений в многоквартирных домах;
- снижение годового удельного расхода энергоресурсов и воды в многоквартирных домах к 2022 году:
- воды - до 50,4 куб. м/чел.;
- электрической энергии - до 26,36 кВт-ч/кв. м;
- тепловой энергии - до 0,20 Гкал/кв. м.	

Характеристика состояния энергопотребления в жилищном фонде города, основные проблемы и прогноз развития сферы

На сегодняшний день жилищный фонд города является самым крупным потребителем энергоресурсов.
Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города в 2009 - 2012 годах представлена на диаграммах:

Как видно из представленных диаграмм, в 2012 году наблюдается увеличение потребления тепловой и электрической энергии в сравнении с объемами 2011 года. Рост потребления указанных ресурсов обусловлен климатическими условиями.
Потребление воды устойчиво снижается с 2009 года.
По состоянию на 01.07.2013 степень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии составляет 99,6%, воды - 99,3% (в части домов нет технической возможности установки приборов учета), тепловой энергии - 72,7%.
По состоянию на 01.07.2013 степень оснащенности многоквартирных домов индивидуальными приборами учета электрической энергии составляет 95%, воды - 64,1%, газа - 8,4%.
Динамика потребления энергоресурсов и воды населением города в 2014 - 2018 годах представлена на диаграммах:

Сохранение потребления тепловой энергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено реализацией энергосберегающих мероприятий по оснащению квартир в введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства индивидуальными приборами учета. Потребление воды и электрической энергии, как видно из представленных диаграмм устойчиво снижается.
На 1 января 2019 года степень оснащенности многоквартирных домов приборами учета составила: общедомовыми: электрической энергии - 100%, по холодной воде - 99,9%, по тепловой энергии - 73,3%; индивидуальными: по электрической энергии - 95,5%, по холодной воде - 84,9%, по газу - 47,65%.
Основными проблемами энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде города остаются:
- высокий уровень морально-технического износа объектов жилищного фонда и его сохраняющийся рост, превышение темпов старения жилищного фонда над темпами модернизации, ведущее к росту рисков аварийности и значительным потерям энергоносителей;
- малая информированность горожан о выгодности и престижности реализации энергосберегающих мероприятий;
- безынициативность, нежелание собственников домов вкладывать средства в энергоэффективные технологии и оборудование. Энергосберегающие мероприятия в жилищном фонде города реализуются только в рамках проведения капитального ремонта;
- отсутствие рынка энергосервисных услуг;
- низкая степень поддержки и стимулирования со стороны государства.
При сохранении текущего положения дел рост платы населения за коммунальные ресурсы неизбежен.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2, сроков и этапов реализации Подпрограммы 2

Главной целью Подпрограммы 2 является снижение объемов потребляемых населением коммунальных ресурсов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- переход на приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов;
- формирование общественного сознания о необходимости снижения потребления коммунальных ресурсов;
- стимулирование жителей к проведению энергосберегающих мероприятий;
- реализация мероприятий по энергосбережению.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде города представлены в приложении 1 к муниципальной программе.
В результате реализации Подпрограммы 2 возможно обеспечить:
- 99% оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах;
- снижение годового удельного расхода энергоресурсов и воды в многоквартирных домах к 2022 году: воды - до 50,40 куб. м/чел., электрической энергии - до 26,36 кВт-ч/кв. м, тепловой энергии - до 0,20 Гкал/кв. м.

Характеристика мероприятий Подпрограммы 2

Основным мероприятием Подпрограммы 2 является мероприятие по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах, которое включает:
- оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду;
- оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности.
Финансовое обеспечение мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, осуществляется за счет средств городского бюджета. Порядок организации работ по оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду, содержащий принцип формирования адресного перечня жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду и подлежащих оснащению индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии, утверждается правовыми актами мэрии города.
Финансовое обеспечение мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2, представлен в приложениях 3, 4 к муниципальной программе, планируемое к установке количество индивидуальных приборов учета в таблице 5.

Таблица 5

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде

N п/п	Наименование мероприятия	Количество приборов учета, шт.	Всего, шт.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду	649	345	307	183	125	118	125	0	0	1852	
2.	Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"
(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	
Соисполнители Подпрограммы 3	-	
Участники Подпрограммы 3	Коммунальные предприятия города	
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3	-	
Цель Подпрограммы 3	Повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов и воды потребителю	
Задачи Подпрограммы 3	- Проведение обязательных энергетических обследований;
- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;
- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системах водоснабжения и водоотведения, при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения;
- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;
- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов	
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (пункт 4 приложения 1 к муниципальной программе)	
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	2014 - 2022 годы	
Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3	Всего 2014 - 2022 годы - 359 748,4 тыс. руб.,
В том числе по годам:
2014 - 35 341,5 тыс. руб.
2015 - 34 529,0 тыс. руб.
2016 - 38 675,9 тыс. руб.
2017 - 32 976,1 тыс. руб.
2018 - 47 942,4 тыс. руб.
2019 - 40 124,9 тыс. руб.
2020 - 44 310,4 тыс. руб.
2021 - 49 286,2 тыс. руб.
2022 - 36 562,0 тыс. руб.	
Объемы бюджетных ассигнований за счет "собственных" средств городского бюджета Подпрограммы 3	0,0 тыс. руб.	
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	- Наличие, своевременная актуализация энергетических паспортов - 100%;
- снижение аварийности и потерь в сетях водоснабжения с 12,0% до 11,6%;
- сохранение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче на уровне 2014 года - 15,69%;
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов - 100%	

Характеристика текущего состояния энергопотребления в коммунальном хозяйстве, основные проблемы и прогноз развития сферы

Коммунальный комплекс города Череповца представлен предприятиями МУП "Теплоэнергия", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", ООО "Газпром теплоэнерго Вологда".
В настоящее время теплоснабжение города обеспечивается шестью котельными, переданными в аренду ООО "Газпром теплоэнерго Вологда" и источниками тепловой энергии ПАО "Северсталь". Протяженность городских тепловых сетей составляет 383,58 км в двухтрубном исчислении. Уровень суммарных фактических потерь тепловой энергии в 2018 году составил 16,7% от отпуска тепловой энергии.
Водоснабжение города осуществляет МУП "Водоканал". В ведении МУП "Водоканал" находится 39 водопроводных и 36 канализационных насосных станций, водопроводные очистные сооружения производственной мощностью 210 тыс. куб. м/сут., очистные сооружения канализации мощностью 265 тыс. куб. м/сут. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составила - 11% (в 2013 году - 11,96%).
В хозяйственном ведении МУП "Электросеть" находится 570 трансформаторных подстанций и 1648,1 км электрических сетей. Потери электрической энергии в сетях, содержащихся на балансе МУП "Электросеть", составляют 4,4% от отпуска (в 2013 году - 6,05%).
Поставщиком природного газа на территории города является OОО "Газпром межрегионгаз Вологда". Протяженность уличной газовой сети составляет 316,59 км.
Эксплуатация сетей наружного освещения города осуществляется муниципальным предприятием "Электросвет". Наружное освещение имеется на 214 городских улицах. Процент горения светильников наружного освещения в городе Череповце составляет 98,5%. Общая протяженность воздушных и кабельных линий составляет 300 км. Количество светильников, находящихся на обслуживании - 10 044 шт.
К основным проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства города можно отнести:
- высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования,
- отсутствие стимулов к экономии,
- неразвитость конкурентной среды,
- неэффективная тарифная политика,
- высокая дебиторская задолженность,
- несоответствие имеющихся инфраструктурных мощностей растущим требованиям и потребителям.

Приоритеты в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3, сроков и контрольных этапов реализации Подпрограммы 3

Главной целью Подпрограммы 3 является повышение эффективности производства и передачи энергоресурсов потребителю.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- проведение обязательных энергетических обследований;
- снижение доли собственного потребления энергоресурсов;
- снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города;
- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;
- снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды в системе водоснабжения, в системе водоотведения, при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения;
- технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий;
- осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города представлены в приложении 1 к Программе.
В результате реализации Подпрограммы 3 возможно обеспечить:
- наличие, своевременную актуализацию энергетических паспортов - 100%;
- снижение аварийности и потерь в сетях водоснабжения с 12,0% до 11,6%;
- сохранение уровня потерь тепловой энергии при ее передаче на уровне 2014 года - 15,69%;
- переход на приборный учет потребляемых энергетических ресурсов - 100%.

Характеристика мероприятий Подпрограммы 3

К мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве города относятся:
1. Повышение энергетической эффективности в системах тепло-, водо- и электроснабжения города (модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям, снижение энергопотребления на собственные нужды котельных, строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения, установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения, замена аварийных участков трубопроводов, модернизация котельных с установкой современных водогрейных котлов, замена светильников уличного освещения на энергоэффективные; замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установка светодиодных ламп, замена ветхих кабелей, вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок).
К организационным мероприятиям, реализуемым в рамках повышения энергетической эффективности во всех системах энергоснабжения города, можно отнести:
- проведение энергетического аудита;
- анализ качества предоставления услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
- выявление бесхозяйных инженерных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация передачи данных объектов в хозяйственное ведение организаций коммунального комплекса.
2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения (реконструкция сетей наружного освещения).

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществляется за счет собственных средств предприятий ООО "Газпром теплоэнерго Вологда", МУП "Теплоэнергия", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", МУП "Электросвет". Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры с необходимыми затратами на их реализацию представлен в таблице 6.

Таблица 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и необходимые затраты на их реализацию

N п/п	Предприятие /объект/, наименование мероприятия	Затраты по годам, тыс. руб.	Всего затрат, тыс. руб.	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	МУП "Теплоэнергия"	500,0	382,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 953,0	929,0	1 243,0	5 007,0	
1.1.	Энергетическое обследование зданий	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
1.2.	Реконструкция котлоагрегата ДКВР котельной "Жемчужина Мологи"	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	
1.3.	Текущий ремонт технологического оборудования, электрооборудования и КИПиА котельной "Жемчужина Мологи"	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	
1.4.	Ремонт кровли над складскими помещениями	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	
1.5.	Замена окон в здании АБК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 263,0	0,0	0,0	1 263,0	
1.6.	Замена дверей Входной группы в здании АБК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0	0,0	390,0	
1.7.	Замена светильников наружного освещения на светодиодные с датчиками освещенности на площадке	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	48,0	
1.8.	Замена светильников на светодиодные в помещениях АБК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,0	0,0	296,0	
1.9.	Реконструкция теплового узла	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1 200,0	1 800,0	
1.10.	Установка балансировочных клапанов на радиаторы в АБК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	
1.11.	Уменьшение поверхности нагрева системы отопления в помещениях профилактория	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	
2	МУП "Водоканал"	7 623,5	682,0	16 189,2	9 254,0	15 344,1	15 344,1	27 614,6	33 024,6	18 284,3	143 360,4	
2.1.	Модернизация насосного оборудования и другого электрооборудования	1 604,9	0,0	1 221,2	3 114,8	3 920,4	3 920,4	18 089,2	15 140,8	15 700,8	62 712,5	
2.2.	Установка ТПЧ	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	
2.3.	Замена уличного и внутреннего освещения на объектах на энергосберегающие светильники	56,0	28,0	56,0	56,0	56,0	56,0	0,0	0,0	0,0	308,0	
2.4.	Замена аварийных участков трубопроводов, с применением труб ПНД	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	
2.5.	Замена изоляции на тепловых узлах и нанесение жидкой изоляции "КорунД"	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	
2.6.	Автоматизация и модернизация тепловых пунктов, зданий и сооружений	0,0	0,0	1 831,3	6 083,2	11 367,7	11 367,7	9 525,4	17 883,8	2 583,5	60 642,6	
2.7.	Модернизация воздуходувного оборудования	2 902,6	0,0	3 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,6	
2.8.	Замена системы отопления с использованием электродных котлов "Галан"	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	
2.9.	Модернизация фасадов зданий	0,0	0,0	9 886,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 886,7	
3	МУП "Электросеть"	24 488,0	23 628,0	8 917,9	22 897,2	32 394,3	23 927,2	14 232,4	14 832,6	16 534,7	181 852,2	
3.1.	Техническое перевооружение и реконструкция											
3.1.1.	Вывод из работы силовых трансформаторов в период минимума нагрузок	0,00	0,00	0,00	126,20	133,30	140,50	147,0	152,8	159,0	858,76	
3.1.2.	Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь, трансформаторов мощностью 180, 315, 320 и 560кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,00	329,70	2 342,2	2 414,8	3 316,3	10 330,04	
3.2.	Модернизация АИИС КУЭ нижнего уровня в целях выявления без учетного потребления, снижения величины потерь электрической энергии	6 390,00	14 000,00	6 841,90	5 836,00	12 151,00	10 048,00	9 336,7	9 626,1	9 914,9	84 144,58	
3.3.	Приобретение автотранспорта с целью снижения затрат на ГСМ и эксплуатационных расходов	18 098,00	9 628,00	2 076,00	7 226,00	18 183,00	12 254,00	0,0	0,0	0,0	67 465,00	
3.4.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	2 406,5	2 638,9	2 709,2	8 909,57	
3.5.	Новое строительство АИИС КУЭ нижнего уровня в целях снижения величины потерь электрической энергии, снижения расходов на обработку данных о потреблении	0,00	0,00	0,00	9 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709,00	
3.6.	Проведение повторного энергетического обследования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,26	435,26	
4	ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	2 555,0	7 975,4	11 856,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 386,4	
4.1.	Внедрение систем частотного регулирования электроприводами	1800	2880	11856	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	16 536,0	
4.2.	Замена ламп накаливания, ламп ДРЛ на энергосберегающие	143,2	5095,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	5 238,6	
4.3.	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления	62,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	62,1	
4.4.	Уплотнение створов ворот производственных зданий и дверей административных зданий	9,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	9,7	
4.5.	Разработка и внедрение спец. компьютерных программ оптимизации распределения тепловых нагрузок между котлами	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	540,0	
5	МУП "Электросвет"	175,0	1 861,6	1 712,8	824,9	204,0	853,6	510,5	500,0	500,0	7 142,4	
5.1.	Реконструкция сетей наружного освещения	175,0	1 861,6	1 712,8	824,9	204,0	400,7	510,5	500,0	500,0	6 689,5	
5.2.	Энергосберегающие технологии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	452,9	0,0	0,0	0,0	452,9	
Всего по предприятиям коммунального комплекса	35 341,5	34 529,0	38 675,9	32 976,1	47 942,40	40 124,9	44 310,4	49 286,2	36 562,0	359 748,4	

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

N
п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение показателя	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями	
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год		
1. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы	
1.1.	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	97,878	98,341	98,500	98,600	98,700	99,000	99,300	99,600	99,900	99,950	99,950	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя; удельное потребление электроэнергии на одного жителя; удельное потребление
теплоэнергии на одного жителя	
1.2.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	67,678	67,833	67,900	68,000	72,000	74,000	76,000	78,000	80,000	81,950	83,93		
1.3.	Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	99,459	99,394	99,460	99,480	99,500	99,520	99,550	99,600	99,650	99,700	99,750		
1.4.	Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	
1.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования	%	87,847	85,025	87,000	89,000	91,000	93,000	95,000	96,000	97,000	98,360	99,500	Х	
1.6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Х	
2. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"	
2.1.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	45,797	37,249	37,249	37,249	36,000	35,500	35,000	34,500	34,000	33,500	33,000	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя	
2.2.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,242	0,244	0,237	0,237	0,230	0,228	0,222	0,216	0,210	0,209	0,209	Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя	
2.3.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м./чел.	46,842	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	48,457	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя	
2.4.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	
2.5.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)	куб. м/чел.	2,314	1,961	1,961	1,961	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	1,007	Х	
2.6.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы	%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Х	
2.7.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	шт.	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	Х	
3. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"	
3.1.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,284	0,274	0,268	0,262	0,250	0,245	0,240	0,235	0,200	0,200	0,200	Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя	
3.2.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м./чел.	76,647	67,135	66,748	65,064	63,429	58,824	57,096	55,375	55,918	51,950	50,395	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя	
3.3.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м./чел.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	
3.4.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВтч/кв. м	34,709	35,575	34,797	33,919	32,747	31,940	31,524	31,013	26,496	26,430	26,364	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя	
3.5.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	тыс. куб. м/ кв. м	0,019	0,021	0,021	0,021	0,019	0,018	0,017	0,016	0,015	0,014	0,13	Х	
3.6.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)	тыс. куб. м/чел.	0,142	0,142	0,142	0,142	0,124	0,118	0,116	0,108	0,100	0,092	0,086	Х	
3.7.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах	т.у.т./кв. м	0,048	0,046	0,045	0,044	0,043	0,040	0,040	0,039	0,038	0,037	0,036	Х	
3.8.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета воды жилых помещений в многоквартирных домах	%	60,000	65,000	74,000	79,000	85,000	93,000	97,000	99,000	99,500	99,600	99,700	Х	
3.9.	Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета электрической энергии жилых помещений в многоквартирных домах	%	95,000	95,000	95,500	95,500	96,000	98,000	98,500	99,000	99,500	99,700	99,800	Х	
3.10.	Количество индивидуальных приборов учета, установленных за счет средств городского бюджета в жилых помещениях, относящихся к муниципальному жилому фонду	шт.	-	-	649	345	307	184	125	118	0	0	0	Х	
4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"	
4.1.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях	т.у.т./ млн. Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Х	
4.2.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных	т.у.т./Гкал	0,1547	0,1547	0,1547	0,1547	0,1542	0,1539	0,1536	0,1533	0,1530	0,1527	0,1524	Х	
4.3.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения	тыс.кВтч/ тыс. куб. м	0,306	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя	
4.4.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	14,779	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	15,692	Удельное потребление теплоэнергии на одного жителя	
4.5.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды	%	10,538	11,964	12,100	12,000	11,891	11,808	11,765	11,607	11,411	11,346	11,200	Удельное потребление холодной воды в расчете на одного жителя	
4.6.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр)	тыс.кВтч/ тыс. куб. м	0,1573	0,1550	0,1686	0,1688	0,169	0,166	0,166	0,164	0,161	0,159	0,157	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя	
4.7.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоотведения (на 1 куб.метр)	тыс.кВтч/ куб. м	0,000123	0,000155	0,000140	0,000140	0,000130	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	0,000122	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя	
4.8.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВтч/кв. м	1,765	1,732	1,769	1,769	1,760	1,750	1,742	1,738	1,734	1,730	1,726	Удельное потребление электроэнергии на одного жителя	
5. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"	
5.1.	количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	2	27	27	27	Х	
5.2.	количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Х	
5.3.	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	2	27	27	27	Х	
5.4.	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Х	
5.5.	количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива;	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	47	40	43	44	Х	
5.6.	количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	Х	

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм

N
п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок начала реализации	Срок окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат, в том числе (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы (подпрограмм)	
Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования"	
1.1	Основное мероприятие подпрограммы 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования	Муниципальные учреждения и предприятия города, органы местного самоуправления	2014	2022	Сокращение расходов тепловой и электрической энергии, экономия потребления воды на муниципальных объектах; обеспечение комфортных условий в муниципальных зданиях; экономия средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений. Наличие в муниципальных учреждениях и на предприятиях энергетических паспортов, в том числе перечня типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Невыполнение требований законодательства в сфере энергоснабжения и энегоэффективности - в части необходимости снижения бюджетными учреждениями объема потребляемых ресурсов на 15% (в сопоставимых условиях).

Рост средств бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений.

Отсутствие развития сферы энергосбережения города	Показатели 2.1.-2.6.	
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Череповецкая автоколонна N 1456"	МУП г. Череповца "Череповецкая автоколонна N 1456"	2014	2022	Экономия воды, тепловой энергии, бензина; сокращение теплопотерь, повышение эффективности использования тепловой энергии			
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Банно-прачечное хозяйство"	МУП г. Череповца "Банно-прачечное хозяйство"	2014	2022	Сокращение теплопотерь, потерь электроэнергии, экономия воды, недопущение проникновения влаги в чердачное помещение			
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Специализированная ритуальная служба"	МУП г. Череповца "Специализированная ритуальная служба"	2014	2022	Обеспечение непроникновения влаги в подвальное помещение, сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии, повышение эффективности использования тепловой энергии			
1.1.4	Мероприятие 1.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Санаторий "Адонис"	МУП г. Череповца "Санаторий "Адонис"	2014	2021	Экономия электроэнергии, экономия электроэнергии, воды, сокращение теплопотерь			
1.1.5	Мероприятие 1.1.5. Реализация энергосберегающих мероприятий МТПП "Фармация"	МТПП "Фармация"	-	-	-			
1.1.6	Мероприятие 1.1.6. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электросвет"	МУП "Электросвет"	2014	2018	Сокращение теплопотерь, экономия электрической энергии, повышение эффективности использования тепловой энергии			
1.1.7	Мероприятие 1.1.7. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электротранс"	МУП "Электротранс"	2014	2022	Обеспечение достоверности в учете потребления энергоресурсов, сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии, теплоэнергии и воды, повышение эффективности использования тепловой энергии			
1.1.8	Мероприятие 1.1.8. Реализация энергосберегающих мероприятий ЧМП "Спецавтотранс"	ЧМП "Спецавтотранс"	2014	2019	Сокращение теплопотерь, обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии, экономия воды, электроэнергии			
1.1.9	Мероприятие 1.1.9. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Жемчужина Мологи"	МУП "Жемчужина Мологи"	2014	2014	Сокращение теплопотерь, экономия электроэнергии			
1.1.10	Мероприятие 1.1.10. Реализация энергосберегающих мероприятий МБУК "ЧерМО"	Управление по делам культуры мэрии	2016	2016	Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии			
1.1.11	Мероприятие 1.1.11. Реализация энергосберегающих мероприятий МКУ "ЦБ ОУК"	Управление по делам культуры мэрии	2017	2017	Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии			
1.1.12	Мероприятие 1.1.12. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 62"	Управление образования мэрии	2016	2016	Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии			
1.1.13	Мероприятие 1.1.13. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 72"	Управление образования мэрии	2016	2016	Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии			
1.1.14	Мероприятие 1.1.14. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 86"	Управление образования мэрии	2016	2016	Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии			
1.1.15	Мероприятие 1.1.15. Реализация энергосберегающих мероприятий МБДОУ "Детский сад N 112"	Управление образования мэрии	2016	2016	Обеспечение надежного функционирования системы теплоснабжения и экономичного потребления тепловой энергии			
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде"	
2.1.	Основное мероприятие подпрограммы 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии,
собственники помещений в многоквартирных домах	2014	2019	Расчет за потребленные коммунальные ресурсы по приборам учета. Снижение потребления данных ресурсов, поскольку установка приборов учета является своеобразным стимулом к экономии.	Нарушение требований законодательства в сфере энергоснабжения и энегоэффективности	Показатели 3.2.-3.10.	
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды и электрической энергии жилых помещений, относящихся к муниципальному жилому фонду	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	2014	2019	Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов в муниципальном жилом фонде			
2.1.2.	Мероприятие 2.1.2. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности	Собственники помещений в многоквартирных домах	2014	2019	Приборный учет потребляемых коммунальных ресурсов; снижение объема потребления коммунальных ресурсов жилых помещений, находящихся в частной собственности			
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве"	
3.1.	Основное мероприятие подпрограммы 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города	Организации коммунального комплекса	2014	2022	Снижение доли собственного потребления энергоресурсов; снижение аварийности и потерь в сетях, повышение надежности систем энергоснабжения города; снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение объемов электрической энергии, используемой при передаче воды; технологическое переоснащение с применением энергосберегающей техники, энергоэффективных материалов и технологий; осуществление учета на всех стадиях производства и распределения энергоресурсов.	Рост аварийности и увеличение потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях.
Увеличение доли собственного потребления энергоресурсов.
Высокий уровень износа коммунальных сетей и оборудования.	Показатели 4.1.-4.7.	
3.1.1.	Мероприятие 3.1.1. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Теплоэнергия"	МУП "Теплоэнергия"	2014	2022	Определение потенциала энергосбережения; экономия топлива; сокращение теплопотерь			
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Водоканал"	МУП "Водоканал"	2014	2022	Экономия электрической энергии; повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии, электроэнергии; сокращение теплопотерь; уменьшение потерь воды			
3.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Реализация энергосберегающих мероприятий МУП "Электросеть"	МУП "Электросеть"	2014	2022	Сокращение потерь электрической энергии; экономия энергоресурсов, бензина и дизельного топлива			
3.1.4.	Мероприятие 3.1.4. Реализация энергосберегающих мероприятий ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	ООО "Газпром теплоэнерго Вологда"	2014	2016	Экономия энергоресурсов; сокращение теплопотерь; повышение эффективности использования энергоресурсов			
3.2.	Основное мероприятие подпрограммы 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения	МУП "Электросвет"	2014	2022	Сокращение потребления электроэнергии	Нарушение требований законодательства в сфере энергоснабжения и энегоэффективности	Показатель 4.8.	

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N
п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Муниципальная программа. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы	всего	892,7	892,7	3 626,7	1 000,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		Управление по делам культуры мэрии	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление образования мэрии	0,0	0,0	2 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования	всего	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление по делам культуры мэрии	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление образования мэрии	0,0	0,0	2 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования	всего	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление по делам культуры мэрии	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Управление образования мэрии	0,0	0,0	2 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	всего	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
5	Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах	всего	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

N
п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год	
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "Город Череповец" на 2014 - 2022 годы	всего	51 189,7	37 541,4	44 134,8	37 268,0	50 793,7	46428.4	46 766,6	51 318,8	37964,8	
		городской бюджет	892,7	892,7	3 626,7	1 000,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	50 297,0	36 648,7	40 508,1	36 268,0	50 494,8	46 144,5	46 467,7	51 313,8	37 964,8	
2	Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования	всего	14 955,5	2 119,7	4 772,2	3 791,9	2 552,4	6 019,6	2 157,3	2 027,6	1 402,8	
		городской бюджет	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	14 955,5	2 119,7	1 832,2	3 291,9	2 552,4	6 019,6	2 157,3	2 027,6	1 402,8	
3	Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по энергосбережению, направленные на снижение потребления энергоресурсов и воды, в организациях с участием муниципального образования	всего	14 955,5	2 119,7	4 772,2	3 791,9	2 552,4	6 019,6	2 157,3	2 027,6	1 402,8	
		городской бюджет	0,0	0,0	2 940,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	14 955,5	2 119,7	1 832,2	3 291,9	2 552,4	6 019,6	2 157,3	2 027,6	1 402,8	
4	Подпрограмма 2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде	всего	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		городской бюджет	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Основное мероприятие 2.1. Оснащение индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов жилых помещений в многоквартирных домах	всего	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		городской бюджет	892,7	892,7	686,7	500,0	298,9	283,9	298,9	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Подпрограмма 3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве	всего	35 341,5	34 529,0	38 675,9	32 976,1	47 942,4	40 124,9	44 310,4	49 286,2	36 562,0	
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники	35 341,5	34 529,0	38 675,9	32 976,1	47 942,4	40 124,9	44 310,4	49 286,2	36 562,0	
7	Основное мероприятие 3.1. Повышение энергетической эффективности в системе тепло-, водо- и электроснабжения города	всего	35 166,5	32 667,4	36 963,1	32 151,2	47 738,4	39 271,3	43 799,9	48 786,2	36 062,0	
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники (МУП "Теплоэнергия", МУП "Водоканал", МУП "Электросеть", ООО "Газпром теплоэнерго Вологда")	35 166,5	32 667,4	36 963,1	32 151,2	47 738,4	39 271,3	43 799,9	48 786,2	36 062,0	
8	Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения	всего	175,0	1 861,6	1 712,8	824,9	204,0	853,6	510,5	500,0	500,0	
		городской бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		внебюджетные источники (МУП "Электросвет")	175,0	1 861,6	1 712,8	824,9	204,0	853,6	510,5	500,0	500,0